WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji
(planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
1	2	3	4	5	
600	Transport i łączność	9 454 037	1 691 939	17,90%	
60016	Drogi publiczne gminne	9 454 037	1 691 939	17,90%	
1.	ul. Zaułek (jezdnia, krawężniki, chodnik, kanalizacja deszczowa)	Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1210 m2 (szerokość 5-5,5 m, długość 198 m), krawężnik 384 m (szerokość 2m), studzienki ściekowe o średnicy 500 mm - 7 kpl., przykanaliki z rur PCV o średnicy 200 mm-39m. Inwestycję zakończono 15.06.2005 r. w ramach wydatków niewygasających;	10 000	0	0%	
2.	ul. Półwiejska-ul. Brzozowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Dnia 30.06.2005 r. zakończono ul. Półwiejską bez łącznika:  nawierzchnia asfaltowa 1217 m2, krawężniki 470m, chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 135 m2, kolektor z rur o średnicy 300 – 205,07 m, przykanaliki o średnicy 200 – 14,92 m, studnie rewizyjne - 7 szt.; studzienki ściekowe – 6; próg zwalniający z oznakowaniem – 1 szt. długość 226 m, szerokość 5,0 (odcinek ul. Dembowskiego-Gnieźnieńska, jednostronny chodnik o szerokości 2 m i długości 60 m). Przewidywany termin zakończenia łącznika do 30.09.2005 r.;	205 000	0	0%	
3.	ul. Motylewska (chodniki, krawężniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, zieleń)	Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2006 r.;	280 000	0	0%	
4.	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Nr 13 (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji) 	Ułożono nawierzchnię asfaltową (szer. 7 m) i chodnik prawostronny (szer.  3 m) z miejscami parkingowymi (20 szt.), do wykonania zieleń na odcinku 106 m  ul. K. Wielkiego. Na pozostałą część zakresu zadania rozpisano przetarg – ul. Kazimierza Wielkiego – 144 m, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Nr 13. 
Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2006 r.	353 000	228 744	64,80%	
5.	Obwodnica Śródmiejska (Al. Powst. Wlkp. - Al. Wojska Polskiego) (obiekty inżynierskie, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej))	Wypłacono część odszkodowań dla działkowców, uiszczono opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu wyłączonego z produkcji leśnej, rozebrano dwa budynki kolidujące z wyznaczonym pasem drogowym;	500 000	238 570	47,71%	
6.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana-Bogusławskiego) jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej))	Budowa obwodnicy Śródmiejskiej m. Piły na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Bogusławskiego. Przeprowadzono roboty przygotowawcze w tym wycinka 286 drzew z karczowaniem pni. Od strony ul. Bogusławskiego dokonano wykopu,  wywieziono 14300 m3 ziemi, wykonano podsypkę piaskową i usunięto kolizje energetyczne.
Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2007 r.;	1 000 000	254 679	25,47%	
7.	ul. Przemysłowa (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej))	Modernizacja ul. Przemysłowej. Zakończona jezdnia: wybudowano nowy odcinek 7 x 1000 m i przebudowano 1400 m poszerzając z 6 do 7 m. Uzyskano pozwolenie na częściowe użytkowanie. Od 12.07.2005 r. udostępnione dla ruchu. Sieci teletechniczne zostaną wykonane do 31.10.2005 r. Do wykonania pobocza i oświetlenie.
Przewidywany termin zakończenia do 20.04.2006 r. 	3 000 000	928 623	30,96%	
8.	ul. Asnyka (0dcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Orzeszkowej oraz chodnik z I etapu) krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodnik, oświetlenie)	Wykonana została dokumentacja techniczna oraz rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi. Przewidywany termin zakończenia wg umowy do 30.10.2005 r.;	390 000	0	0%	
9.	ul. Piękna (krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa)	Wykonano dokumentację techniczną;	230 000	0	0%	
10.	ul. Różyckiego (nawierzchnia z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa)	Z mieszkańcami została zawarta umowa o darowiznę celową na budowę ulicy (5 umów). Został rozstrzygnięty przetarg na budowę ul. Różyckiego. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 31.10.2005 r.;	195 000	610	0,32%	
11.	ul. Partyzantów (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Wykonano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę;	288 000	10 220	3,55%	
12.	ul. Turkusowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.09.2005 r.;	120 000	0	0%	
13.	ul. Dąbrowskiego-wydłużenie (krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa)	Wykonano dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy;	167 000	7 259	4,35%	
14.	Progi zwalniające (dokumentacja)	Ogłoszono przetarg na  wykonanie dokumentacji;	49 937	0	0%	
15.	ul. Olimpijczyków (nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki)	Wykonano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę;	180 000	11 836	6,58%	
16.	ul. Lelewela – sięgacze (sięgacze, pobocze, 2 ścieżki rowerowe)	Wykonano dokumentację techniczną. Rozstrzygnięto przetarg na budowę sięgacza Nr 131. Przewidywany termin zakończenia wg umowy do 15.08.2005 r.;	230 000	0	0%	
17.	ul. Lelewela (modernizacja ulicy (pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego))	Starosta Pilski wystąpił o dotację z budżetu państwa;	200 000	0	0%	
18.	ul. Libelta (chodnik)	Wykonano dokumentację techniczną;	40 000	0	0%	
19.	ul. Bydgoska, ul. Okólna, ul. Kusocińskiego (budowa sygnalizacji świetlnej)	Wykonano dokumentację techniczną;	100 000	0	0%	
20.	ul. Kaczorska (kanalizacja deszczowa i sanitarna)	Wykonano dokumentację techniczną;	250 000	64	0,03%	
21.	ul. Sokola – I etap (jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy,zieleń)	Wykonano dokumentację techniczną;	955 000	0	0%	
22.	ul. Konopnickiej (miejsca parkingowe wzdłuż południowej strony ulicy)	Negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa co do możliwości wykonania parkingu w planowanym miejscu;	10 000	0	0%	
23.	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa)	Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono termin przetargu na budowę na 18.08.2005 r.;	483 000	0	0%	
24.	ul. Lipowa (parking przy sklepie spożywczym)	Opracowano dokumentację techniczną;	60 000	0	0%	
25.	ul. Salezjańska (ciąg pieszy do ul. Mickiewicza)	Opracowano dokumentację techniczną, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę;	100 000	8 284	8,29%	
26.	ul. Zielona Dolina (oświetlenie uliczne)	Wykonano dokumentację techniczną;	58 100	3 050	5,25%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 147 000	777 172	36,20%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	777 172	55,64%	
1.	Wykupy terenów wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Wypłacono odszkodowania za działkę przy ul. Dalekiej, nr działki 114/1 o pow. 0,0558 ha;	147 000	16 508	11,23%	
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Nabyto nieruchomości: przy ul. Bydgoskiej  dz. nr 4/6 o pow. 341596 ha, dz. nr 125/5 o pow. 183429 ha; przy ul. Polnej dz. nr 4/2, 11/62 i 11/63 o łącznej powierzchni 0,6045 ha. Zwrócono pierwszą opłatę za prawo użytkowania wieczystego dz. nr 239 o pow. 0,0600 ha położonej przy ul. Zielona Dolina;	1 250 000	760 664	60,86%	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	750 000	0	0%	
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojskowych (wniesienie udziałów)	W I półroczu nie został rozstrzygnięty przetarg na realizację mieszkań przy ul. Podchorążych. Z chwilą rozpoczęcia prac adaptacyjnych, stosownie do potrzeb, zostaną wniesione środki finansowe w formie aportu;	750 000	0	0%	
750	Administracja publiczna	1 315 000	139 295	10,60%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315 000	139 295	10,60%	
1.	Sieć teleinformatyczna (budowa szerokopasmowej sieci miejskiej w Pile, podłączenie do regionalnej sieci szerokopasmowej) 	Wybudowano 4 przyłącza teletechniczne do punktów: przyłączenie do regionalnej sieci szerokopasmowej od budynku UM Piły, budynku  BGK o/Piła, budynku KP Policji, budynku PWSZ oraz budynku SzP Nr 12. Trwają przygotowania do uruchomienia programu korzystania z sieci PIONIER we współpracy z PCSS. W przygotowaniu koncepcja dot. wykorzystania miejskiej sieci  teleinformatycznej do przesyłu obrazu z kamer oraz podłączenia dodatkowych kamer. W trakcie budowa sieci teletechnicznej ul. Przemysłowa – do 31.10.2005 r.;	350 000	139 295	39,80%	
2.	Wielkopolska platforma usług publicznych on line (studium wykonalności, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Przygotowany jest przetarg na zakup komputerów;	500 000	0	0%	
3.	Urząd Miasta (modernizacja dachu budynku UM)	Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w III kwartale br.	465 000	0	0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0	0%	
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	0	0%	
1.	Kamera do systemu monitoringu, dofinansowanie zakupu samochodu (kamera (rondo przy Młynie), dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji))	Koncepcja dot. wykorzystania miejskiej sieci teleinformatycznej wskaże możliwości wykorzystania sieci miejskiej teleinformatycznej do przesyłu obrazu i uniezależnienia się w ten sposób od kosztownego korzystania z usług TP S.A.;
Podpisano umowę o dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji.	60 000	0	0%	
801	Oświata i wychowanie	4 500	4 495	99,89%	
80101	Szkoły podstawowe	4 500	4 495	99,89%	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 5 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną ZL PE 21.	4 500	4 495	99,89%	
851	Ochrona zdrowia	9 500	0	0%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 500	0	0%	
1.	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem, drukarki igłowej oraz oprogramowania księgowego)	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta 28.06.2005 r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.	9 500	0	0%	
852	Pomoc społeczna	1 485 000	45	0,01%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900 000	45	0,01%	
1.	Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny;	900 000	45	0,01%	
85295	Pozostała działalność	585 000	0	0%	
1.	Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz biblioteka. Koszt termomodernizacji           1 100 000 zł)	Wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny na modernizację budynku i przygotowanie na CAOCiN „OAZA” uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano zgodę WFOŚiGW na pożyczkę w części umarzalną na termomodernizację. Rozpisano przetarg na wykonanie przyłącza CO i węzła cieplnego;	435 000	0	0%	
2.	Zakład Aktywizacji Zawodowej Nr 12	Inwestycja prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej;	150 000	0	0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 500	558 441	21,47%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	0	0%	
1.	Spółka Wodno-Ściekowa „Gwda” (wniesienie udziałów) 	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta 28.06.2005 r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.;	15 000	0	0%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	75 050	46,91%	
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza)	Dokonano przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej. Zbudowano 2 studnie kablowe i kanalizację kablową z rur pp; ułożono 140 m kabla w powłoce termoplastycznej i zamontowano metalową szafę kablową.
W czerwcu zakończono budowę sieci wodociągowej na nowej części cmentarza. Posadowiono rurociąg z rur polietylenowych o długości 958 m, wykopano 14 punktów czerpalnych i zamontowano zawory ogrodowe. Ponadto zbudowano 2 studnie odwadniające i 11 studni chłonnych przy punktach czerpalnych. Rozliczenie inwestycji nastąpi w miesiącu lipcu br.;	150 000	75 050	50,04%	
2.	Zakupy inwestycyjne (zakup komputera z oprogramowaniem)	Zakup komputera zaplanowano na II półrocze br.;	6 000	0	0%	
3.	Zakupy inwestycyjne zakup programu AUTOCAD do inwentaryzacji terenów zieleni)	Zakup programu AUTOCAD zaplanowano na II półrocze br.;	4 000	0	0%	
90095	Pozostała działalność	2 426 500	483 391	19,93%	
1. 	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pile na osiedlu Koszyce- K3 w rejonie al. Niepodleglości i ul. Miłej. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2006 r.;	965 000	483 391	50,10%	
2.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje: ul. Chodzieska, ul. Szafirowa, ul. Armii Ludowej, ul. Rzemieślnicza)	W przygotowaniu są przetargi na dokumentację;	150 000	0	0%	
3.	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Przygotowano dokumentację przez MWiK, uzyskano pozwolenie na budowę;	347 000	0	0%	
4.	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Posiadane środki budżetowe nie pozwalają na rozpoczęcie robót budowlanych, trwają poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania;	464 000	0	0%	
5.	ul. Kujawska (zmiana ujęcia wody z cieku C do kanalizacji deszczowej)	Został rozstrzygnięty przetarg na budowę zmiany ujęcia wody z cieku do kanalizacji deszczowej ul. Kujawskiej. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 31.10.2005r.	260 000	0	0%	
6.	Boisko na osiedlu Gładyszewo 	Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na realizację robót.	40 500	0	0%	
7.	Aquapark (dokumentacja)		200 000	0	0%	
926	Kultura fizyczna i sport	362 000	0	0%	
92695	Pozostała działalność	362 000	0	0%	
1.	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Całość robót została zakończona i odebrana. Uzyskano świadectwo PZLA. Trwają procedury rozliczeniowe. Obiekt oddano do eksploatacji – odbyły się zawody sportowe.	362 000	0	0%	
RAZEM	17 438 537	3 171 387	18,19%	

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji
(planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
1	2	3	4	5	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000	4 821	15,07%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000	4 821	15,07%	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (zakup skafandrów, systemu łączności podwodnej, automatu oddechowego, butli powietrznej, JACKET oraz innego drobnego sprzętu nurkowego)	Zakupiono obudowę do kamery podwodnej;	32 000	4 821	15,07%	
750	Administracja publiczna	70 000	0	0%	
75095	Pozostała działalność	70 000	0	0%	
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile (dofinansowanie))	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.	70 000	0	0%	
801	Oświata i wychowanie	80 000	0	0%	
80104	Przedszkola	80 000	0	0%	
1.	Przedszkole Nr 3 (dostosowanie bloku żywieniowego do przepisów HCCP – wyburzenie i przestawienie ścianek działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie)	Przetarg rozstrzygnięto 5 maja 2005 r., termin realizacji – 5 sierpnia 2005 r. Zakres prac ogólnobudowlanych obejmuje: wyburzenie i przestawienie ścianek działowych, odsadzenie stolarki drzwiowej, wykonanie ogładzin ściennych i podłogowych, wymiana instalacji wod-kan c.o., wymiana armatury sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu.	80 000	0	0%	
803	Szkolnictwo wyższe	500 000	13 600	2,72%	
80395	Pozostała działalność	500 000	13 600	2,72%	
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (modernizacja budynku dydaktycznego B przy ul. Podchorążacyh 10)	Podpisane zostało porozumienie o dotowanie przez Gminę Piła;	286 400	0	0%	
2.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (przyłącze teletechniczne do PWSZ w ramach podłączenia do regionalnej sieci teleinformatycznej)	Dotacja została przekazana;	13 600	13 600	100%	
3.	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile (uruchomienie studiów uzupełniających magisterskich)	Brak porozumienia.	200 000	0	0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	0	0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000	0	0%	
1.	Pilski Dom Kultury (impregnacja sali wielkiej – kotary, wykładziny, fotele) 	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.;	12 000	0	0%	
2.	Pilski Dom Kultury (przygotowanie dokumentacji i wniosku o współfinansowanie ze środków UE (zadanie Modernizacja Pilskiego Domu Kultury))	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.;	15 000	0	0%	
926	Kultura fizyczna i sport	522 000	52 186	10,00%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	522 000	52 186	10,00%	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (przygotowanie dokumentacji o współfinasnowaniu ze środków UE)	Inwestycja w trakcie realizacji;	100 000	7 320	7,32%	
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty przy ul. Żeromskiego – ogrodzenie kortów przy hali s-w)	Inwestycja w trakcie realizacji;	20 000	0	0%	
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty przy ul. Żeromskiego – modernizacja łazienek w wieży dowodzenia)	Inwestycja zrealizowana;	39 950	39 950	100%	
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty przy ul. Żeromskiego – zakup sprzętu sportowego i sanitarnego do Studia rekreacji Nr II)	Inwestycja na etapie  przygotowywania dokumentacji procedur zamówień publicznych;	65 050	0	0%	
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 – modernizacja stacji do uzdatniania wody basenowej)	Inwestycja na etapie przygotowywania dokumentacji postępowania przetargowego;	39 000	0	0%	
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 – modernizacja natrysków przy przebieralniach)	Inwestycja na etapie przygotowywania dokumentacji postępowania przetargowego;	50 000	0	0%	
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki – modernizacja hydroforni)	Inwestycja na etapie przygotowywania dokumentacji – II postępowanie przetargowe;	33 084	0	0%	
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki – modernizacja trafostacji i linii średniego napięcia)	Inwestycja zrealizowana – faktura w drodze; 	122 916	4 916	4,00%	
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki – zakup sprzętu sportowego wodnego do wypożyczalni sprzętu)	Inwestycja w trakcie realizacji zamówienia;	30 000	0	0%	
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup 2 zestawów komputerowych)	Inwestycja w trakcie realizacji zamówienia;	5 000	0	0%	
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup zeskoku do skoku wzwyż)	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.;	17 000	0	0%	
RAZEM	1 231 000	70 607	5,74%